별첨 5	개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군단위 LPG배관망 지원사업

담당자

경제마케팅과

서종윤(☎540-6413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스 미공급 농어촌 지역에 LPG배관망을 구축하여 주민의 연료사용

환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 1 ~ 2020. 12. (2년)

○ 위 치 :  진도읍 14개마을 3,196세대

○ 규 모 :  LPG저장탱크 30톤 3기, 배관망 46.7Km, 보일러 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  28,900 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	28,900
국 비			5,300	8,500
시 도 비				1,200
시군구비			4,200	6,800
지 방 채
민간자본				2,700
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

○ 저장탱크 부지 기초 터파기 및 암깨기

○ 가정배관 매관 매설 작업

□ 향후계획

○ 저장탱크 부지 콘크리트 타설

○ 가정배관 작업 및 도로 배관 매설 작업

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

진도신비의바닷길축제

담당자

관광과

이기복(☎540-3407)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내외 관광객들에게 주목받는 경쟁력 있는 축제로 육성하여 관광객이       참여하고, 체험하는 다양한 관광프로그램 확대로 글로벌 축제로 기획

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 3월 ~ 4월

○ 위 치 : 고군면 회동리 ~ 의신면 모도리 일원

○ 규 모 : 주제행사, 공연행사, 글로벌행사, 체험행사,부대행사,전시행사, 홍보 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계			754	0
국 비		170	170	0	0
시 도 비
시군구비		600	584	0	2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 진도군축제추진위원회 개최

○ 코로나19 확산 방지를 위한 진도 신비의 바닷길 축제 취소로 전면 통제

□ 향후계획

○ 향후 축제 개최 일정 심의

○ 축제 기본계획 수립

○ 진도군축제추진위원회 개최

□ 사업변경 내역

○ 2020년 코로나19 예방을 위해 진도 신비의 바닷길 축제 전면 취소로

예산 미집행

사업명

아리랑 굿거리 조성사업

담당자

지역개발과

오수완(☎540-3875)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진도 전통·문화 예술의 활성화 및 관광자원화

○ 지역 문화자원을 활용 지역성장 동력 마련

○ 지속가능한 일자리 창출 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.(3년간)

○ 위 치 : 진도군 진도읍 남동리 및 동외리 일원

○ 규 모 : 굿 문화환경 조성, 문화예술시장 사업, 굿 프로그랩 운영사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100억원

(단위 : 억원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	100	-	-	40	60
국 비
시 도 비	50	-	-	20	30
시군구비	50	-	-	20	30

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 실시설계용역(도시계획도로 및 주차장)            : ‘20. 4.

○ 아리랑 굿거리 총괄계획가 채용                   : ‘20. 5.

○ 아리랑 굿거리 관련 선진지 견학(전주 첫마중길)    : ‘20. 5.

□ 향후계획

○ 굿거리 공원조성 설계공모 용역                   : ‘20. 9.

○ 도시계획도로 및 주차장 공사 착수                : ‘20.11.

○ 굿거리 공원조성 공사 착수                       : ‘21 2.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥도 연도교 시설사업

담당자

진도항만개발과

김영기(☎540-6467)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거점섬(상조도)과 연결하는 연도교 건설사업을 통해 주민들의 정주여건 개선,       1일 생활권 확보 및 원활한 농수산물 유통으로 인한 주민 소득증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 조도면 상조도 여미리 ~ 옥도리 일원

○ 규 모 : 해상교량 L=120m, 접속도로 L=791m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,500	-	-	-	-
국 비	1,500	-	-	750	750
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	-	-	-	6,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2020. 3. 10. ~ : 옥도 연도교 가설공사 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 1. 9. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2021. 1. : 옥도 연도교 가설공사 계약 및 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모

- 당초 인도교 L=120m, 접속도로 L=850m

- 현재 연도교 L=120m, 접속도로 L=791m

○ 총사업비 : 당초 20억원 / 현재 75억원

사업명

염장교 개축공사

담당자

건설교통과

김승만(☎540-3472)

□ 사업목적 및 필요성

○진도읍 염장리 주민들이 주로 이용하는 교량이며 특정관리대상시설로       관리되고 있는 교량으로서 2017. 5. 교량 정밀점검 결과 주형부 휨균열,     신축이음 유간폐쇄로 인한 신축기능 상실, 탄산화에 의한 철근부식 등      C등급으로 평가됨

○또한 교량의 폭이 협소하여 지역민의 이용이 불편함에 따라 주민의 안전한

통행 및 편의 증진을 위해 교량의 개축이 필요함

(염장교: L=55m, B=4.5m, RC T-Beam 형식, 1985년 준공, 설계하중 DB-13.5)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 이후

○ 위 치 : 진도읍 포산리 1624번지

○ 규 모 : 교량 1개소 개축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,000	-	-	-	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  - %)

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 염대지구 자연재해위험개선지구 정비사업 반영하여 추진

- 염장교 개축사업

□ 사업변경 내역

○ 당초: 20억원(군비 100%) ⇒ 변경: 20억원(국비 50%, 군비50%)

사업명

진도군 지하시설물 전산화사업

담당자

민원봉사과

박주성(☎540-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ “국가 공간정보정책 기본계획”의 국책사업 시행.

○ 도시기반 통합정보 및 관리시스템 구축.

○ 일반 행정업무의 능률제고 및 정보인프라 구축으로 대민 서비스 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 진도군 진도읍 일원

○ 규 모 : 도로 및 상/하수시설물 GIS DB구축 212.54km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	0	150	900	950
국 비	1,200	0	90	540	570
시 도 비
시군구비	800	0	60	360	380
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7.5%)

○ 3차년 총괄사업 중 1차년도(150백만원) 수행 완료.

○ 현재 2차년도 231백만원에 대하여 수행중.(선금 185백만원 지급완료)

□ 향후계획

○ 2020년 추경예산 668백만원에 대하여 추가수행 예정.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2019년 1차년도 변경계약 완료. (당초)143백만원 -> (변경)150백만원

사업명

도서급수 운반선 건조

담당자

상하수도사업소

강경남(☎540-6207)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급수 공급이 되지 않는 도서지역 주민들에게 깨끗하고 안정적인 식수

공급을 위해 급수운반선을 건조 운영

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020

○ 위 치 : 진도군 21개 도서

○ 규 모 : 70톤(31.52m 6.4m 2.7m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000		95	3,905
국 비	2,800		67	2,733
시 도 비	240		5	235
시군구비	960		23	937
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 도서급수 운반선 기본 및 실시설계         `19. 3. ~ `19.  8.

○ 도서급수 운반선 건조사업 추진            `20. 1. ~ `20. 11.

○ 도서급수 운반선 건조사업 책임감리 용역   `20. 2. ~ `21.  1.

□ 향후계획

○ 도서급수 운반선 건조사업 완료   `20. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

향토문화회관 공연장 리모델링

담당자

시설사업소

하선웅(☎540-6258)

□ 사업목적 및 필요성

○ 향토문화회관 공연장의 장기간 사용에 따른 노후화로 리모델링 공사를

통해 관람객에게 쾌적한 공연 관람 환경 제공 및 지역문화예술 기반조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. 3. ~ 9. 20.(80일간)

○ 위 치 : 진도 향토문화회관

○ 규 모 : 향토문화회관 공연장(2,032㎡) 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000		0	3,000	0
국 비
시 도 비	1,200		0	1,200	0
시군구비	1,800		0	1,800	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 공연장 내부 유리섬유, 석면자재, 암면스프레이, 객석의자 등 철거

○ 공연장 천정부 캣워크 및 공조기 덕트 설치 완료

○ 전기, 통신, 소방공사 배선 및 배관공사 진행

□ 향후계획

○ 공연장 벽체,천정 및 로비홀 인테리어 환경개선 추진

○ 공조기, 냉.난방기기, 객석의자, 전기, 통신 소방공사 병행 추진

□ 사업변경 내역

○ 없음.

사업명

첨찰산 운림명승지구 관광활성화사업

담당자

관광과

박근철(☎540-3417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨찰산 운림명승지구와 연계한 생태 수변공원 등 관광기반 시설을 조성하여       사계절 볼거리 제공 및 관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 진도군 의신면 사천리 일원

○ 규 모 : 생태 친수공간, 전통문화공간, 예술천 거리조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,800
국 비
시 도 비	2,900			275	2,625
시군구비	2,900			275	2,625
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. : 2020년 관광자원화개발사업 신규사업 확정

○ 2020.  4. : 기본 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2020.  3. : 공사 착공

○ 2023. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

전망좋은 관광해안도로 조성사업

담당자

관광과

박근철(☎540-3417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다도해 자연경관 및 주변 자원과 연계한 관광편의시설을 조성하여 관광객       유치 등 관광산업활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 관광해안도로 L=16km(쉬미~청룡, 보전~금노, 가치~세방)

○ 규 모 : 전망타워, 해안데크로드, 쉼터조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,800
국 비
시 도 비	2,900			275	2,625
시군구비	2,900			275	2,625
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. : 2020년 관광자원화개발사업 신규사업 확정

○ 2020.  4. : 기본 및 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2020.  3. : 공사 착공

○ 2023. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

세방낙조 관광명소화 사업

담당자

관광과

정지훈(☎540-3418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해안 일몰의 관광명소로 손꼽히는 세방낙조에 차별화된 특색 있는 전망대       조성으로 관광객 유치 및 관광산업 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 진도군 지산면 세방낙조 일원

○ 규 모 : 전망대 및 스카이워크, 해안데크로드 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,800
국 비
시 도 비	2,900			275	2,625
시군구비	2,900			275	2,625
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. : 2020년 관광자원화개발사업 신규사업 확정

○ 2020.  4. : 기본계획 수립 착수

□ 향후계획

○ 2020.  9. : 기본계획 수립 완료

○ 2020. 12. : 실시설계 완료

○ 2021.  1. : 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

섬관광 이미지 개선사업

담당자

관광과

정지훈(☎540-3418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 다도해해상 주요 여객항로 구간 내 도서명을 설치하여 아름다운 섬을       알려 관광객 유치게 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 진도군 지산면 세방낙조 일원

○ 규 모 : 도서명 설치 12개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,400	0	0	200	2,200
국 비
시 도 비	1,200			100	1,100
시군구비	1,200			100	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. : 2020년 관광자원화개발사업 신규사업 확정

○ 2020.  4. : 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2020.  8. : 다도해해상국립공원 행위허가 협의

○ 2020. 10. : 실시설계 완료 및 공사 발주

○ 2020. 11. : 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

이충무공 공원 관광명소화사업

담당자

관광과

박근철(☎540-3417)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이충무공 공원 일대에 명량대첩과 연계한 역사교육 및 제험형 관광 공원으로       조성하여 관광객 유치에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 진도군 군내면 녹진리 일원

○ 규 모 : 역사의 계단, 포토존, 공원정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	0	0	400	1,600
국 비
시 도 비	1,000			200	800
시군구비	1,000			200	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 11. : 2020년 관광자원화개발사업 신규사업 확정

○ 2020.  4. : 실시설계 착수

□ 향후계획

○ 2020.  8. : 다도해해상국립공원 행위허가 협의

○ 2020. 10. : 실시설계 완료 및 공사 발주

○ 2020. 11. : 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

노후관광지(회동) 재생사업

담당자

관광과

정지훈(☎540-3418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 회동관광지 내 관광시설 및 콘텐츠를 구축하여 관광객에게 새로운       체험 및 볼거리를 제공하는 등 관광활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 진도군 고군면 회동관광지 일원

○ 규 모 : 해양생태관 전시콘첸츠, 전망데크길, 포차거리조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	0	0	200	3,800
국 비
시 도 비	1,600			80	1,520
시군구비	2,400			120	2,280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019.  7. : 2019 노후관광지(회동) 재생사업 공모 선정

○ 2020.  4. : 기본계획 수립 용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 기본계획 수립 완료

○ 2021.  1. : 사업 착공

○ 2021. 12. : 사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

진도군 가족센터 건립

담당자

안전생활지원과

박희재(☎540-6878)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양해진 가족유형에 필요한 가족 지원 서비스를 효율적으로 제공하고         기존의 분산된 복지시설들을 집약함으로써 이용자의 접근성 증대 및 시너지        효과를 창출하여 진정한 세대 소통 복합형 시설을 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 진도군 진도읍 동외리 1140 외 1필지

○ 규 모 : 연면적1,439㎡(지하1층~지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500			1,500	2,000
국 비	1,500			750	750
시 도 비
시군구비	2,000			750	1,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 4. 30. 지적정리 및 사업계획 변경 신청 및 승인

○ 2020. 7. 7. ~ 8. 11. 공공건축 사업계획 사전검토

□ 향후계획

○ 2020. 8. ~ 10. 건축설계공모 및 용역사 선정

○ 2020. 10. ~ 12. 기본 및 실시설계용역

○ 2020. 12. 전남도 계약심사, 건축협의 등 행정절차 이행

○ 2020. 12. 공사 발주 및 계약

○ 2021. 1. ~ 12. 공사 착공 및 준공, 개관 등

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경
위 치	진도군 진도읍 동외리 1189	진도군 진도읍 동외리 1140 외 1필지
전 용 면 적	759㎡	799㎡
	○가족소통교류공간: 190㎡ ○공동육아나눔터: 70㎡ ○다함께돌봄센터: 70㎡ ○장난감도서관: 50㎡ ○사무실: 109㎡ ○언어발달교실: 50㎡ ○놀이치료실: 50㎡ ○교육실: 100㎡ ○상담실: 70㎡	○상담실:70㎡ ○교육실:150㎡ ○다문화자녀언어교실:50㎡ ○공동육아나눔터:99㎡ ○다목적가족소통교류공간:250㎡ ○사무실:110㎡ ○다함께돌봄센터: 70㎡
지방비	1,500백만원	2,000백만원
사업기간	2020. 1. ~ 2021. 12.	변경 없음

○ 여성가족부 가족정책과(2020. 7. 1.), 보건복지부 인구정책총괄과(2020. 6. 10.) 변경 승인

사업명

선진농협 RPC 개보수사업

담당자

농업지원과

정인호(☎540-3543)

□ 사업목적 및 필요성

○진도군 대표 RPC인 선진농협 미곡종합처리장의 각종 시설 노후화로 개보수가 필요

○미곡종합처리장(RPC) 개보수 사업 지원으로 농가 계약재배 확대 및 고품질 쌀

확보로 농가소득 증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 진도군 고군면 오일시1길 82 선진농협 RPC

○ 규 모 : 도정공장 1동(447평), 가공·건조저장 시설 보수

(현미부, 포장부, 건조기, 사일로 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비				300
시군구비				1,800
지 방 채
민간자본				900
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○사업 설계 완료(‘20. 4. 21.)

○사업설계검토 및 시행업체 선정 입찰공고(5. 18.)

○보조금 교부결정 통보(‘20. 5. 8.)

○사업 착공계 제출(‘20. 5. 27.)

○건축 및 도정시설·장비 사업 추진(공정률60%)

□ 향후계획

○ 시설·장비 구축 및 준공 9. 30.

○ 시설·장비 분야별 검토 및 점검 후 사업비 집행