별첨 4	개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

진도군 기록관 신축

담당자

행정과

이인주(☎540-3227)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「공공기록물 관리에 관한 법률」의 기록관 시설 장비 및 환경기준에 부합한 기록관        건립으로 공공기록물의 안정적 보존환경 마련 및 역사 자료 활용을 위한 토대 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 진도군 진도읍 교동리 149

○ 규 모 : 932.33㎡/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,400		300	1,000	2,100
국 비
시 도 비
시군구비	3,400		300	1,000	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2021. 7.

○ 공사발주 및 착수(총괄, 1차분) : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 공사발주 및 착수(총괄, 2차분) : 2021. 10.

○ 공사준공(1차분) : 2021. 12.

○ 공사준공(총괄, 2차분) : 2022. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 30억/현재 34억

사업명

공립노인요양시설 및 다목적체육관 신축

담당자

주민복지과

김윤란(☎540-3122)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노인 및 치매인구의 증가에 따른 맞춤형 돌봄시설 필요

○ 장애인복지관 이용자 등 체육시설 수용 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 진도읍 남동리 453-25외 4필지

○ 규 모 : 지상 4층 / 3,384㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,290			295	3,995
국 비	3,432			236	3,196
시 도 비	429			29.5	399.5
시군구비	429			29.5	399.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  %)

○ 2020. 06. : 공유재산 관리계획 승인

○ 2020. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료

○ 2020. 10. : 지방재정투자 심사 및 공공건축 기획 심의, 생활SOC복합화사업 선정

○ 2021. 04. : 기본설계 공모 완료, 기본 및 실시설계 착수

○ 2021. 07. : 기본설계 보고

□ 향후계획

○ 2021. 09. : 기본 및 실시설계 완료, 도 계약심사 및 인허가 추진

○ 2021. 10. : 공사발주 및 착공

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

진도군청소년문화의집 건립

담당자

안전생활지원과

이승희(☎540-6888)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년들의 사회성과 감성 능력 배양을 위한 거점 공간 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023

○ 위 치 : 진도읍 동외리 1140외 1필지

○ 규 모 : 부지면적 12,677㎡, 지상 3층(연면적 1,320㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000			200	3,800
국 비
시 도 비	3,200				3,200
시군구비	800			200	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  %)

○ 21. 03. 1차 추경(건축기획업무 및 실시설계 용역비) 2억 편성(군비)

○ 21. 04. 건축기획업무 용역

○ 21. 07. 공공건축 심의

□ 향후계획

○ 2021. 08. : 건축설계공모 공고

○ 2021. 10. : 기본 및 실시설계용역 발주

○ 2022. 04. : 공사 착공(차수분 발주)

○ 2023. 05. : 공사 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 예산확보

(당초)`20. 6월 균형발전특별회계 사업 예산신청 ->미선정

(변경)`21. 6월 균형발전특별회계 사업 예산신청(10월경 사업확정 통보)

사업명

화물자동차 등 다목적 공영차고지 조성

담당자

건설교통과

정재곤(☎540-3493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대형차량의 밤샘주차로 인한 안전사고와 민원을 해결하고 저가의 공영

차고지를 공급하여 화물운송자의 경쟁력 향상코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ~ 2022년 12월

○ 위 치 : 진도읍 포산리 1765-3번지 등 11번지

○ 규 모 : 차고지 조성(25,500㎡, 대형 차량 등 255면 및 부대시설 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000			2,000	1,000
국 비	2,100			1,400	700
시 도 비
시군구비	900			600	300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(부지 확보중)

○ 사업부지 확보중 : 2021. 08. ~ 10.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 : 2021. 10~ 2021. 12.

○ 사업발주 및 준공 : 2021. 12. ~ 22. 09.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가사항 어촌뉴딜 300사업

담당자

진도항만개발과

박지이(☎540-6472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌·어항을 연계하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광등 산업발전,       주민역량강화 등을 통해 지역의 활력을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 조도면 가사도리 일원

○ 규 모 : 기항지 개선, 어항시설 보강, 어울림 센터등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,633백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,633		3,500	5,453	4,680
국 비	9,543		2,540	3,817	3,276
시 도 비	1,227		315	491	421
시군구비	2,863		735	1,145	983
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 공모선정 : 2019. 12. 12.

○ 위수탁 계약(한국농어촌공사) : 2020. 03. 20

○ 기본·실시설계 수립용역 착수 : 2020. 07.

○ 기본계획 수립·고시(해수부 승인) : 2020. 12. 23.

○ 생활SOC사업 어항시설 정비공사

- 전남도 생활 SOC사업 전남도 사전 협의 : 2021. 03. 12.

- 전남도 계약심사 완료 : 2021. 05. 24.

- 개찰완료 : 2021. 07. 01.

□ 향후계획

○ 시행계획 수립·고시 : 2021. 10.

○ 특화사업 발주 : 2022. 01.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

귀성항 어촌뉴딜 300사업

담당자

진도항만개발과

김영주(☎540-6473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌·어항을 연계하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광등 산업발전,       주민역량강화 등을 통해 지역의 활력을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 임회면 귀성리 일원

○ 규 모 : 어항시설 정비, 귀성 공동 생활마당, 몽돌상회 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,495백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,495		1,966	2,998	2,531
국 비	5,248		1,376	2,099	1,773
시 도 비	674		177	270	227
시군구비	1,574		413	629	532
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공모선정 : 2019. 12. 12.

○ 위수탁 계약(한국어촌어항공단) : 2020. 03. 20

○ 기본·실시설계 수립용역 착수 : 2020. 05. 27.

○ 기본계획 수립·고시(해수부 승인) : 2020. 12. 22.

○ 생활SOC사업 전남도 사전 협의 : 2021. 03. 24.

○ 행정절차 이행(간이해역이용협의, 공유수면 점사용허가) : 2021. 03.

○ 어항시설 정비공사 착공 : 2021. 06. 11. ~ 2022. 06. 10.

□ 향후계획

○ 시행계획 수립·고시 : 2021. 10.

○ 행정절차 이행후 특화사업 발주 : 2022. 01.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

회동지구 기항지 개선사업

담당자

진도항만개발과

김영주(☎540-6473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 여객선 기항지 시설에 대하여 운항여건 등을 고려한 기항지 개선       사업을 통한 이용객의 편익 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 고군면 가계리 및 금호도리 일원

○ 규 모 : 금호도 경사식 접안장, 물양장 확충, 회동 물양장 확충, 부잔교                및 도교 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000		750	1,200	1,050
국 비	2,100		525	840	735
시 도 비	270		68	108	95
시군구비	630		158	252	221
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 공모선정 : 2019. 12. 12.

○ 실시설계 용역 추진 : 2020. 05. 15.

○ 기항지 개선사업 시행계획 전남도 협의 : 2020. 11. 23.

○ 회동 기항지 개선사업

- 1차분 준공 : 20. 12. 24. ~ 21. 04. 30.

- 2차분 착수 : 21. 01. 28. ~ 21. 11. 23.

○ 회동 안전조명시설 설치공사(준공) : 20. 12. 24. ~ 21. 03. 23.

○ 금호도 안전조명시설 설치공사(준공) : 21. 01. 04. ~ 21. 04. 03.

□ 향후계획

○ 회동 기항지 개선사업(3차분) 착수 : 2021. 09.

○ 회동 기항지 개선사업(2, 3차분) 준공 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.