별첨 4	개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

환경관리센터 소각시설 개선사업(대체신규)

담당자

환경산림과

서종윤(☎540-3782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 진도군에서 발생하는 생활폐기물은 환경관리센터에서 소각하고 있으나, 기기       부식 및 마모 등 안정적인 운영이 어려워 신규 시설을 설치하여 위생적,         효율적, 경제적으로 처리하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 전남 진도군 군내면 한의길 115 (환경관리센터)

○ 규 모 : 소각시설 30톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,800		1,000		16,800
국 비	5,300		300		5,000
시 도 비
시군구비	12,500		700		11,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021.07.20. : 소각시설 기본 및 실시설계 용역 계약체결(도화엔지니어링외 3개사)

○ 2022.03.07. : 소각로 및 부대설비 제작·설치 제안요청 조달 의뢰

□ 향후계획

○ 2023.01 : 환경관리센터 소각시설 설치사업 착수

○ 2024.12 : 환경관리센터 소각시설 설치사업 준공

사업명

신기항 어촌뉴딜 300사업

담당자

진도항만개발과

박지이(☎540-6472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌·어항을 연계하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전,       주민역량 강화 등을 통해 지역의 활력을 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년(3년)

○ 위 치 : 군내면 나리(신기항) 일원

○ 규 모 : 어항시설 정비, 신기활력센터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,784백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,784		1,756	3,514	3,514
국 비	6,150		1,230	2,460	2,460
시 도 비	790		158	316	316
시군구비	1,844		368	738	738
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 12. : 공모선정

○ 2021. 01. : 위(수)탁 계약(한국농어촌공사)

○ 2021. 09. : 기본계획 승인․고시

○ 2022. 04. : 공유수면 점․사용 허가 완료

○ 2022. 04. : 생활SOC사업 전남도 사전 시행계획 협의

○ 2022. 05. : 생활SOC사업 전남도 계약심사 완료

○ 2022. 06. : 생활SOC사업(공통사업 토목공사) 발주

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 생활SOC사업(공통사업 토목공사) 착수

○ 2022. 12. : 시행계획 승인․고시

○ 2023. 01. : 행정절차 이행 후 특화사업 발주

사업명

녹진관광지 야행테마거리 조성사업

담당자

관광과

기현주(☎540-3418)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광객 급증에 따른 녹진관광지 내 새로운 볼거리 제공으로 체류형 관광객       유치 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 진도군 군내면 녹진관광지 일원

○ 규 모 : A=20,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000		172	1,000	1,828
국 비
시 도 비	1,500		86	500	914
시군구비	1,500		86	500	914
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15%)

○ 2021. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 공사 발주

○ 2023. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

진도-제주 쾌속카페리 함선

및 도교 설치

담당자

진도항만개발과

한병석(☎540-6457)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남도에서 진도항 2단계 건설사업으로 항만부지 조성을 완료하고 여객선

터미널 신축공사를 추진 중에 있으나 접안시설이 없고 서남해안 해양관광

중심지 육성과 해상 물류비용·시간 절감으로 진도항 활성화 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 03. ~ 2022. 03.

○ 위 치 : 진도군 임회면 진도항 일원

○ 규 모 : 함선(30m×20m) 1개, 도교(20m×5m) 1개, 비가림시설 200m, 방충제 4개

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비	500			500
시 도 비
시군구비	3,000		1,218	1,122	660
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 04. : 진도항 도교 및 함선 설치공사 실시설계용역 착수

○ 2021. 11. : 진도항 접안시설(함선) 제작 설치 착공

○ 2021. 11. : 진도항 접안시설(도교 및 잔교) 설치공사 착공

○ 2022. 04. : 진도항 접안시설(도교 및 잔교) 설치공사 완료

○ 2022. 04. : 진도항 접안시설(함선) 제작 설치 완료

□ 향후계획

○ 지속적인 도교, 잔교, 함선에 대한 유지보수

사업명

도서업무추진

다목적 행정선 건조사업

담당자

진도항만개발과

박성혜(☎540-6454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항 및 섬 개발사업, 섬 지역 민원현장 방문, 복지행정 등 신속 다양한 행정서비스 제공

○ 산불 및 응급환자 이송 등 위급상황 발생 시 신속한 대처

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 01. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 진도군 일원

○ 규 모 : 신규 다목적 행정선 1척

○ 내 용 : 30톤(알류미늄) / 정원 16명 / 속력 최대 30노트

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,200	-	-	15	3,185
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	480	-	-	-	480
시군구비	2,720	-	-	15	2,705
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 02. 26. : 지방재정투자심사 의결

○ 2021. 03. 26. : 공유재산 관리계획 의결

○ 2021. 12.     : 시‧군 현안 재정 지원사업비 확보

○ 2022. 06. 02. : 친환경 행정선 도입 타당성 조사 용역 발주

□ 향후계획

○ 2022. 09. ~ 2023. 01. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2023. 01. ~ 2023. 12. : 다목적 행정선 건조 완료

사업명

면단위 지하 시설물 전산화사업

담당자

민원봉사과

한지훈(☎540-3623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지하 시설물의 부정확한 정보로 가스폭발 등 대형사고가 발생함에 따라

지하 시설물을 체계적으로 관리할 필요성 대두

○ 도로를 기반으로 지하에 매설되어 있는 상·하수도 지하 시설물에 대하여

위치정보를 전산화하여 시설물의 효율적 관리와 각종 재난 및 안전사고를

사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 진도군 군내면, 고군면, 의신면, 임회면, 지산면, 조도면 일원

○ 규 모 : 1,034.1㎞(도로 449.14㎞, 상수도 419.96㎞, 하수도 165㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			-	1,222	7,278
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 진도군 면단위 지하시설물 전산화사업(2단계) 계약체결 및 사업착수

□ 향후계획

○ 지하시설물 조사/측량/탐사 및 정위치/구조화편집

○ 공공측량성과심사 및 준공

○ 진도군 면단위 지하시설물 전산화사업 3단계 계약 체결 추진

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 진도군 면단위 지하시설물 전산화사업(2021~2025) 총괄 사업 추진

○ 변경 : 단계별 사업 추진[2단계(2022~2023), 3단계(2024~2025), 4단계(2026)]

사업명

공직자숙소 신축공사

담당자

세무회계과

조광현(☎540-3345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신규공직자들의 숙소선정의 어려움 및 민간숙소 이용관련 경제적 부담

○ 신규공직자 관리의 효율성 및 직원복지차원 숙소 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 06. ~ 2022. 10

○ 위 치 : 진도군 진도읍 교동리 271-2번지 일원

○ 규 모 : 지하1층 지상4층 40세대, 연면적 2,342㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			2,650	2,350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  55%)

○ 2022. 07. : 지상2층 골조공사 완료

□ 향후계획

○ 2022. 07. ~ 08.  : 지상3층 ~ 4층 골조공사 완료

○ 2022. 09. ~ 10. : 내외부 마감공사 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 22년 3회 추경 시 사업비 추가 확보 예정(1,000백만원)

사업명

진도군 볼링장 건립사업

담당자

문화예술체육과

윤선화(☎540-3082)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 스포츠 활동 기회 제공으로 지역주민의 여가 선용 및 생활체육

활성화를 통한 군민 건강증진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 05. ~ 2023. 01.

○ 위 치 : 진도군 진도읍 동외리 183(실내체육관 옆)

○ 규 모 : 950.40㎡/ 10레인

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000			1,300	1,700
국 비	630			390	510
시 도 비
시군구비	2,370			910	1,190
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 01. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2022. 05. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료

○ 2022. 06. : 자재(볼링설비) 및 업체 선정

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 실시설계 완료 및 전남도 계약심사

○ 2022. 09. : 공사 착공

○ 2023. 01. : 진도군 볼링장 준공

사업명

조도면 농어촌폐기물 소각시설 설치

담당자

환경산림과

손정민(☎540-3723)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조도면 환경관리센터 소각시설의 노후화 및 주변 17개 도서지역의 생활폐       기물 처리량 증가로 폐기물 전량을 적정하게 처리할 수 있는 용량의 현대적       기술이 적용된 소각시설 설치로 안정적, 위생적 폐기물 처리 및 군민의       쾌적한 생활환경 조성에 기여

□ 사업개요

○ 사업명 : 조도면 농어촌폐기물 처리시설 설치

○ 기  간 : 2022. 1. ~ 2024. 3.

○ 위  치 : 진도군 조도면 모래미로 433(창유리 2790)

○ 규  모 : 부지면적 15,355㎡(생활폐기물 소각시설 2톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,770			1,520	1,250
국 비	1,500			250	1,250
시 도 비	635			635
시군구비	635			635
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021.  3. : 노후 소각시설(15년 경과) 기술진단 용역 완료

○ 2021. 12. : 타당성 조사 및 기본계회 수립

○ 2022.  2. : 예산지원 사전검토 협의(환경부, 전라남도)

□ 향후계획

○ 2022. 9. ~ 2023. 2. : 실시설계 용역 및 국립공원 협의

○ 2023. 3. ~ 2024. 3. : 소각시설 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

서울웨딩홀 리모델링 공사

담당자

문화예술체육과

한견주(☎540-3057)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 지역 작가들의 작품 전시공간 조성을 통한 문화예술 진흥 및 민속문화예술특구 위상 제고

◦ 향토문화회관, 무형문화재전수관, 작은영화관 등 인근 문화시설을 활용한 관광객 및 군민들께 문화향유 기회 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2023. 04.

○ 위 치 : 진도읍 동외1길 6-4

○ 규 모 : 지하 1층, 지상 3층 / 부지 1,154㎡ , 건물 2,292.32㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,490백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,490		1,990	0	2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 11. : 건축물 및 토지매입

○ 2021. 12. : 건축물 기획 용역

○ 2022. 03. : 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2022. 11. : 리모델링 공사 발주

○ 2023. 04. : 리모델링 준공